HD드라마타운 건립 사업 추진현황

1. 사업목적

ㅇ 드라마 등 콘텐츠 제작환경 개선을 위한 대형스튜디오 위주의 제작단지

를 조성하여 한류의 글로벌 확장과 콘텐츠 5대 강국 실현 도모

ㅇ 전국의 스튜디오 및 세트장과의 연계성 강화를 통한 국토의 문화적

균형 발전 도모

2. 사업개요

ㅇ 위    치 : 대전광역시 유성구 대덕대로 480 엑스포과학공원 내

ㅇ 규    모 : 부지면적 66,115㎡/연면적 33,421㎡(지하1층, 지상 3층)

ㅇ 주요시설(스튜디오, 제작지원, 후생, 운영시설 등)

- 스튜디오 5실(1,500평형 1실/1,000평형 1실/500~600평형 3실),

특수시설 (수술실, 법정, 공항내부 등) 스튜디오 1실(1,000평형),

다목적 야외 오픈스튜디오, 미술센터

- 분장실, 대기실, 시사실, 식당, 간이 숙소, 회의실 등

ㅇ 사업기간 : 2011 ∼ 2015년

- 설계기간 : `12. 8. 29 - `13. 7. 30

- CM기간(1차분) : `12. 9. 3 - `13. 9. 2 (총기간 : `15. 12까지)

- 공사시행 예정 : `13. 11 - `15. 12

ㅇ 총사업비 : 873억원

- 설계비(34.9억),감리비(27.8억),공사비(656억), 방송설비(63억원)

시설부대경비(10.9억), 제세공과금외 (80억)

※ 2013년 예산 : 111억(잠정 확정)

3. 추진경과

ㅇ `09. 08 : HD드라마타운 건립사업 타당성 연구용역 완료 및 사업

추진 요청 (대전광역시 → 문화체육관광부)

ㅇ `09. 12 -`10. 08 : 예비타당성 조사실시 (기재부/KDI)

ㅇ `11. 07 - 12 : 기본계획수립 용역 시행 (해안종합건축사사무소)

ㅇ `12. 2.13 : 사업부지 무상사용 임대차 계약 체결 (사용기간 : 30년)

(대전광역시,대전마케팅공사,한국콘텐츠진흥원간 체결)

ㅇ `12. 08 : 현상설계공모 및 설계용역 계약 (계약금액 : 3,220백만원)

- 계약업체 : ㈜삼우종합건축사사무소,(주)해안종합건축사사무소(공동수급)

ㅇ `12. 08 : 조달청을 통한 건설사업관리(CM)용역 계약 (계약금액 : 2,783백만원)

- 계약업체 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링,(주)자영엔지니어링(공동수급)

ㅇ `12. 10 : 계획, 중간, 실시설계 단계중 계획설계 완료

※ 2013. 03월 현재 중간설계 진행중

4. 향후 추진일정

ㅇ `13. 4 – 5 : 교통영향평가 용역 시행

ㅇ `13. 5 : 교통영향분석 ․ 개선대책 심의(대전시 심의위원회)

ㅇ `13. 7 : 건축인허가 취득

ㅇ `13. 7 : 설계 완료 예정

ㅇ `13. 7 – 11 : 조달청 공사발주 및 공사착공

ㅇ `13. 11 - : 공통가설공사 및 터파기