「디지털방송콘텐츠지원센터」건립 현황

□ 사업목적

ㅇ 방송콘텐츠의 기획․제작․송출․유통에 필요한 서비스를 원스톱으로 제공할 수 있는 공동 제작시설 조성하여 방송콘텐츠 산업 활성화 및 수출 경쟁력 강화

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : ’10~‘13. 9월

ㅇ 총사업비 : 2,276억원

- 문화부(국고) : 시설비(건축․토목․기계․전기 공사)/ 1,172억원

- 방통위(방통기금) : 부지매입비, 방송장비비, 부대비 / 1,104억원

ㅇ 부지위치 : 경기도 고양시 한류월드 제3구역 O3지역

ㅇ 사업규모 : 부지면적 10,702㎡ ,연면적 56,587㎡(지하4층, 지상20층)

ㅇ 주요시설 : 스튜디오 6실-대형(485평) 1실, 중형(300평) 1실, 소형(159평 3실, 169평 1실) 4실, 편집실 17실, 녹음․음향더빙실 4실, 송출실 1실, 업무시설(9～20층)

▶ 사업추진체계 : 문화체육관광부와 방송통신위원회 공동사업으로써 시설건립은 한국콘텐츠진흥원에서, 방송장비 구축은 한국방송통신전파진흥원에서 담당

□ 건립현황

ㅇ 방송영상 제작지원 시설 구축 공동추진에 관한 문화부-방통위 합의(‘09.1.12)

ㅇ 문화부, 방통위 업무협력 협약서 체결(‘10.2)

ㅇ 콘텐츠진흥원(문화부), 전파진흥원(방통위) 공동 사업추진단 구성(‘10.4)

ㅇ 기본계획 수립(‘10.8) / 기본설계 심의 및 턴키사업자 선정(’11.2)

ㅇ 공사 계약 체결(대우건설 컨소시엄, ’11.3) / 착공식 개최(‘11.5)

ㅇ ‘12. 3월 현재 공정률 22.5%

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	합 계
문화부	시설비(건축·토목공사 등)	1,992	38,892	41,163	35,163	117,210
방통위	부지매입비, 방송장비비 등	7,850	34,600	38,944	30,858	110,359
합 계		9,842	73,492	80,107	66,021	227,569

□ 시설세부내역

시 설		수량	세 부 기 능
기획 (개발)	교육센터	12실	▪ 아이디어의 실제 구현, 신개념 콘텐츠 창작, 포맷 개발, 공동제작 프로젝트 등을 위한 실습시설 지원
제작	스튜디오	6실	▪ 1,605㎡ 1실, 992㎡ 1실, 559㎡ 1실, 525㎡ 3실, 부조정실 포함
	편집실	17실	▪ HD 종합편집실 6개/ HD 개인편집실 10개
	녹음․더빙실	각2실	▪ 5.1CH 돌비녹음 및 음향 더빙 기능
송출	송출시설	15CH	▪ 15개 PP채널의 콘텐츠를 플랫폼사업자에 디지털 전송
유통 (활용)	포맷변환실	2실	▪ 국내․국외 OSMU를 위한 다기능 포맷변환 지원
	회선조정실	1실	▪ 데이터방송 등 양방향콘텐츠의 뉴미디어플랫폼 구현 테스트 지원
	아카이빙․ 온라인 유통 시설	각1실	▪ 콘텐츠의 보존, 활용을 위한 데이터베이스 및 온라인 유통을 위한 시스템 지원
광역제작지원	HD 중계차	1대	▪ 전국권 HD 제작, 송출 지원
비즈 니스	교육․사무실	11개층	▪ 방송콘텐츠 창작/기획, 방송 신기술, 유통/마케팅 분야 등 교육, 오피스 시설 지원
기타	상가․체험관		▪ 입주 및 방문 업체를 위한 편의시설, 일반인을 위한 체험시설

□ 조감도