「한국콘텐츠진흥원 신사옥」건립 현황

□ 사업목적

ㅇ 국가균형발전특별법」제18조 제3항과「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건 설 및 지원에 관한 특별법」제4조 및 동법 시행령 제3조에 근거하여, 공공기관 지방이전 시책을 효율적으로 추진하고자 함

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2011 ~ 2014

ㅇ 총사업비 : 382억원(자체자금)

- 건설비(설계, 공사, CM) : 334억원

- 부지매입비 : 48억원

ㅇ 부지위치 : 전남 나주시 금천면 일원(광주.전남공동혁신도시 이전10)

ㅇ 사업규모 : 부지면적 10,508㎡ ,연면적 12,188.56㎡(지하1층, 지상5층)

ㅇ 주요시설 : 사무실, 콘텐츠홀, 도서관, 체력단련실, 식당 등

□ 건립현황

ㅇ ‘10.05.20. 지방이전계획 국토해양부 승인

ㅇ ‘11.06.30. 종전 부동산(본사 건물) 매각, 계약

ㅇ ‘11.07.13. 이전부지 매입, 계약 체결

ㅇ ‘12.01.04. 신청사옥건립 설계용역, 계약

ㅇ ‘12.02.15. 건설사업관리(CM)용역, 계약

ㅇ ‘12.07.18. 건축허가(나주시청) 완료

ㅇ ‘12.07.20. 신사옥 건립공사 실시설계 완료

ㅇ ‘12.08.31. 시공업체 선정 조달청 발주 의뢰

ㅇ ‘12.11.06.~11.08 시공업체 계약

ㅇ ‘12.11.26. 신사옥 건립공사 착공(예정)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	합 계
건축비(설계,CM,공사)	1,235	13,816	15,296	3,070	33,417
토지매입비	4,756				4,756
합 계	5,991	13,816	15,296	3,070	38,173

□ 시설세부내역

구 분	전용면적	공용면적	합 계	주요용도
1층	2,383.27㎡	652.97㎡	3,036.24㎡	로비, 다목적홀, 직원식당, 근생시설, 매점, 카페테리아, 접견실, 상설전시장, 중정 등
2층	1,486.26㎡	436.81㎡	1,923.07㎡	도서관, 콘텐츠 체험실, 콘텐츠 체험사무실, 콘텐츠 시연실, 체력단련실, 옥상정원 등
3층	723.21㎡	535.90㎡	1,259.11㎡	아웃소싱실, 다목적교육실, 노동조합실, 동호회실, 여자휴게실, 아이디어룸 등
4층	1,272.26㎡	351.12㎡	1,623.38㎡	사무공간, 문서고, 중회의실, 소회의실, 실내휴게정원, 본부장실, 비품창고 등
5층	1,131.02㎡	396.42㎡	1,527.44㎡	사무공간, 문서고, 원장실, 부원장실, 소회의실, 대회의실, 접견실, 비서실, 등
지상층 소계	6,996.02㎡	2,373.22㎡	9,369.24㎡
지하1층	2,689.45㎡	129.87㎡	2,819.32㎡	기계실, 저수조, 우수조, 전기실, 발전기실, 청정소하 약제실, 종합방재실, 주차장 등
지하층 소계	2,689.45㎡	129.87㎡	2,819.32㎡
합 계	9,685.47㎡	2,503.09㎡	12,188.56㎡	업무시설

□ 조감도